김해GoldenRoot일반산업단지 교통영향분석․개선대책 및 연계교통체계 구축용역

과 업 지 시 서

2014. 2

한국산업단지공단

목   차

Ⅰ. 과   업   개   요

Ⅱ. 일   반   사   항

Ⅲ. 보안 및 비밀유지

Ⅳ. 설   계   변   경

Ⅴ. 성  과  품  목  록

Ⅰ. 과   업   개   요

Ⅰ. 과업개요

1. 과업명	: 김해GoldenRoot일반산업단지 교통영향분석․개선대책 및 연계교통체계 구축용역

2. 단지개요

가. 위치 : 경남 김해시 주촌면 망덕리·농소리 일원

나. 면적 : 약 1,524,154㎡

3. 목적 : 동측 진입로 변경(4차선 → 2차선)에 따른 연계교통체계 및 계획변경에 따른 교통영향분석 및 개선대책 수립

4. 과업범위

가. 연계교통체계구축대책 수립

나. 교통영향분석 및 개선대책 수립

5. 과업수행기간

가. 본 과업의 수행기간은 계약일로부터 5개월로 한다.(관계기관 협의 미완료시 완료시까지 연장)

나. 다음의 경우에는 발주자의 승인을 얻어 과업기간을 변경할 수 있다.

1) 천재지변으로 과업수행에 차질이 있을 때

2) 발주자의 계획변경 등 방침에 따라 본 과업의 중단 또는 과업내용의 현저한 변경이나 증감이 있을 때

3) 기타 과업과 관련하여 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생하였을 때

6. 과업내용

가. 연계교통체계구축대책

산업단지 동측 진입로의 국비지원이 불가함에 따라 계획 변경(4차선→2차선)을 위한 연계교통개선대책 변경을 목적으로 한다.

아래 항목을 주내용으로 하되 세부내용에 대해서는 관련법률 / 지침을 따르며, 지침에 명시되지 아니한 사항은 발주자 및 관계전문가의 의견에 따라 합리적이고 효율적으로 작성한다.

1) 서론

2) 관련계획 검토 및 현황조사분석

3) 장래교통수요예측

4) 사업시행으로 인한 예상문제점

5) 개선대책

6) 타당성 검토

7) 개선대책의 시행계획

8) 성과품 작성

9) 관계기관 협의 및 보고자료 작성

10) 기타 수반되는 제반사항

사. 교통영향분석 및 개선대책

산업단지 계획변경에 따라 필요한 교통영향분석 및 개선대책을 수립, 변경 심의(협의) 등을 완료하는 것을 목적으로 한다.

1) 서 론	사업의 개요 교통영향분석ㆍ개선대책수립 사유및수립시기 적정성 교통영향분석ㆍ개선대책수립 범위 교통영향분석ㆍ개선대책수립 결과 요약
2) 교통환경조사 분석	교통시설 및 교통소통 현황 인접지역 토지이용 및 개발계획 현황 교통관련 공공계획
3) 사업지구 및 주변지역의 장래 교통수요	사업 미시행시 교통수요 예측 사업 시행시 교통수요 예측 주차수요 예측
4) 사업시행으로 인한 문제점 및 개선방안	가. 사업시행으로 인한 문제점
		주변가로 및 교차로 진ㆍ출입동선 대중교통 및 보행 주차 통안전 및 기타
	나. 개선방안
		사업지구 개선방안 사업지구 주변지역 개선방안 시뮬레이션 분석(필요시 적용) 종합개선안
	다. 개선효과
		계량분석 비계량분석
5) 개선안 시행계획	시행주체 및 시행시기 공사 중 교통처리대책(필요시 적용)
6) 성과품 작성	보고서 작성 심의 준비
7) 관계기관 협의 및 보고자료 작성 8) 기타 수반되는 제반사항

아래 항목을 주내용으로 하되 세부내용에 대해서는 관련법률 / 지침을 따르며, 지침에 명시되지 아니한 사항은 발주자 및 관계전문가의 의견에 따라 합리적이고 효율적으로 작성한다.

Ⅱ. 일   반   사   항

Ⅱ. 일반사항

1. 일반사항

가. 본 과업지시서는 용역과업을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 모든 과업은 본 과업지시서에 의하여 수행하고, 이에 규정되지 아니한 사항은 관련법령, 정부가 제정한 각종 건설공사기준, 사업목적, 관계기관 협의사항 등과 연계검토한 후, 우리 공사의 감독원과 협의하여 수행하여야 한다.

나. 본 과업수행에 참여하는 인력은 관련 법령에 의한 자격이상인 자로서 학식과 경험이 풍부한 전문가로 구성하여 합리적이고 과학적인 과업수행이 되어야 한다.

다. 본 과업수행 중 사업책임기술자나 본 과업을 수행하는 인력 또는 기타 고용인은 성실히 감독원의 지시에 따라야 하며, 감독원은 불성실 또는 부적당하게 본 과업을 수행하는 사업책임 기술자나 본 과업을 수행하는 인력 또는 기타 고용인에 대하여 교체를 명할 수 있으며 수급자는 이에 응해야 한다.

라. 승인, 자료제출, 기타 경비 등은 수급자 부담으로 한다.

2. 과업착수 및 공정보고

가. 과업의 착수는 계약체결 후 7일 이내에 하여야 하며, 착수전에 착수계, 과업수행계획표, 책임기술자 선임계, 과업수행자 명단 및 이력서, 보안각서 등 과업수행에 필요한 제반서류를 제출하여 우리 공단의 승인을 득 하여야 한다.

나. 과업의 진척보고는 매월 감독원을 경유 관계기관 협의 및 추진사항을 포함하여 서면으로 보고하여야 한다.

다. 각 과업은 중간보고 및 과업완료 이전에 종합보고를 하여 보완사항에 대해 최종 보완보고서를 작성하여야 하며, 기타 감독원이 필요하다고 요구할 경우에도 보고서를 작성·제출하여야 한다.

라. 감독원이 필요하다고 요구할 경우에 용역준공 이전 및 실시계획 인가신청이전에 필요한 서류를 제출하여야 한다.

마. 용역 준공 전 인허가(협의), 승인을 득 하여야 한다.

3. 손실보상

본 과업으로 인하여 수급자가 제3자에게 피해를 주었을 경우에는 수급자 부담으로 손실을 보상하여야 한다.

4. 용역감독의 권한

가. 용역감독

감독원은 이 과업을 수행함에 있어 수시로 수급인에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인 및 감독 할 권한을 가지며, 수급인은 이에 적극 협조하여야 한다.

1) 기술인력 동원현황

2) 도서 작성현황 및 업무수행상태

3) 기타 확인이 필요한 사항

나. 용역점검

감독원은 설계품질 확보를 위해 수급인에 대한 정기 또는 수시 점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 수급인은 감독원과 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

5. 수급인의 책임

가. 책임한계

1) 감독원의 승인을 받은 설계도서라 할지라도, 수급인의 잘못으로 발생한 모든 하자에 대하여 수급인의 책임이 면제되는 것은 아니며, 수급인은 용역준공 후에도 이러한 사항에 대해 발주자의 수정․보완요구가 있을 때에는 수급인부담으로 시정․조치하여야 한다.

2) 수급인은 본 과업과 관련하여 제3자에게 피해를 주었을 경우 이에 대한 손실보상 등 모든 책임을 져야 한다.

3) 수급인이 감독원에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청 또는 이의제기는 서면으로 하여야만 그 효력이 발생한다.

나. 지시의 이행

감독원이 용역업무의 수행에 관하여 사업책임기술자에게 지시부를 통하여 지시한 경우 사업책임기술자는 지시된 사항의 이행 계획서 및 검토 보고서를 작성하여 서명 날인한 후 제출하여야 한다.

다. 관계기관 협의

1) 과업수행을 위해 요구되는 각종 인․허가에 필요한 제출서류를 수급인의 부담으로 작성하여 감독원과 사전협의후 직접 관계기관과 업무협의를 하여야 한다.

2) 수급인은 관계기관과 업무협의를 하기 전에 협의할 내용 및 자료 등에 대하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

3) 수급인은 협의 완료 후 협의 결과를 감독원에게 즉시 보고하여야 하며, 용역 준공시에 회의록 등 회의자료를 정리하여 제출하여야 한다.

라. 공정관리

수급인은 설계시 개략공사비를 산정하여 보고하여야 하며, 과업 수행시 과업량과 과업기간을 상시 점검․관리하여야 하고 실시계획승인을 득한 즉시 공종별 세부 잔여 설계 과업량 및 소요일수와 공사발주 가능시기 등을 작성하여 감독원에게 보고하여야 한다.

마. 문서의 기록비치

수급인은 이 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 감독원의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 내용을 문서로 작성․비치하여야 하며, 감독원의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

6. 통계자료의 사용

통계자료는 그 근거가 명확하고 객관적으로 인정되는 자료를 적용하여야 한다.

7. 용역중지

수급인의 귀책사유가 아닌 인․허가 지연, 민원발생, 관계기관 협의지연 및 각종 심의신청 기간 소요 등으로 인하여 용역의 계속 추진이 불가하다고 판단될 경우 감독원은 용역중지를 명할 수 있다.

8. 용역수행자의 교체

가. 본 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 책임기술자 또는 용역에 참여하고 있는 건설기술자가 과업의 수행에 불성실하거나 부적당하다고 감독원이 인정하는 경우 수급인에게 교체를 요구할 수 있으며  수급인은 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

나. 본 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 감독원의 승인을 받아 그와 동등이상의 자격을 갖춘 건설기술자로 즉시 교체하여야 한다.

9. 착수신고서 및 기타제출

가. 수급인은 과업을 착수한 즉시 다음 각 호의 서류를 제출하여야 한다.

1) 착수계

2) 책임기술자 선임계

3) 책임기술자 사용인감계

4) 책임기술자 이력서 및 기술자격증 사본

5) 분야별 책임기술자 이력서 및 기술자격증 사본

6) 예정공정표

7) 참여기술자 명단(이력서 및 기술자격증 사본)

8) 보안각서(연명부 형식) 및 보안대책

9) 기타 발주자가 요구하는 사항

나. 수급인은 필요시기에 다음의 제반서류를 제출하여야 한다.

1) 용역기성부분 검사원

2) 준공기한 연기원

3) 준공 검사원

Ⅲ. 보안 및 비밀유지

Ⅲ. 보안 및 비밀유지

1. 보안관계 법규의 준수

수급인은 정부 또는 발주자가 요구한 보안관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 수급인이 져야 한다.

2. 수급인은 보안대책을 수립하여야 하며, 용역 착수계와 함께 수급인 보안각서와 용역참여자에 대한 보안각서를 제출하되 반드시 자필로 서명하여야 하며, 용역참여자가 교체될 시에도 또한 같다.

3. 용역참여자가 교체될 시에는 인계, 인수를 철저히 하고 감독원의 승인을 받아야 하며 과업수행에 차질이 없어야 한다.

4. 수급인은 본 용역의 작업장소를 통제구역 또는 제한구역으로 지정하고 외부인의 출입을 통제하여야 한다.

5. 자료보관함은 별도 비치하되 비밀, 대외비, 일반자료 보관함으로 구분하고 정·부 책임자를 지정하여 관리하여야 한다.

6. 용역의 정·부 책임자는 공정의 진도를 감안하여 외부에 유출될 경우 물의를 일으킬 수 있는 성과물이 작성되었다고 판단될 때에는 업무일지를 비치하여 작업내용을 기록·유지 하여야 한다.

7. 과업성과품 발간 시 유의사항

수급인은 필요시 중간 및 최종보고서 등 과업성과물을 감독원과 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류, 관리하여야 하고, 대외비로 분류되는 자료의 발간 시는 감독원과 협의하여 정부에서 인가한 발간업체에서 발간하여야 한다.

8. 수급인은 본 과업을 수행함으로써 산출된 자료 및 내용 등을 공단의 사전 승인없이 소유 또는 임의로 복사하거나 외부단체 및 개인에게 제공 또는 공개해서는 안된다.

Ⅳ. 설   계   변   경

Ⅳ. 설계변경

발주자는 다음과 같은 경우에 설계변경을 요구할 수 있으며 수급인은 이에 따라야 한다.

가. 상위계획 또는 발주자의 계획변경으로 인하여 과업범위가 변경될 때

나. 지자체 또는 관계기관과의 협의내용 반영을 위한 과업내용 변경시

다. 수급인의 귀책사유가 아닌 용역의 중지 등에 따른 과업기간의 연장

라. 사업 추진계획 변경에 따른 사업계획 등이 변경될 경우

Ⅴ. 성과품 목록

1. 성과품 작성

성과품 작성수량은 아래 수량을 원칙으로 하되, 감독원과 협의하여 최종 낲품 성과품 수량을 확정하고, 각종 성과품은 인쇄물 및 분야별로 전산화(CD)하여 제출하여야 한다.

가. 보고서 : 10부(A4)

나. 전산화일(CD-ROM)